준공기한 연기의뢰서

1. 사업개요

가. 공 사 명 : 홍제천 제3교 상류 ~ 백련교 상류 차집관로 보수공사

나. 도 급 자 : (주)형제이형관  대표 김동용

나. 도 급 액 : 금 410,041,000원

다. 착공연월일 : 2016. 06. 20

마. 준 공 기 한 : 2016. 10. 17

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기

바랍니다.

가. 당초 준공기한 : 2016. 10. 17

나. 변경 준공기한 : 2016. 12. 10

다. 연기사유 귀책소재 : 난지물재생센터

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 연기사유

- 수방기간(2016. 6. 15~2016. 9. 15) 및 우천 시 하천 내 공사금지로

공사 착공이 지연되어 절대 공기가 부족.  끝.