준공기한 연기의뢰서

1. 용역개요

○ 용  역  명 : 신정중앙로등 9개노선 자전거도로 구축 및 실시설계용역

○ 계  약  자 : ㈜서우티이씨 대 표 : 강 대 신

○ 계 약 금 액 : 금88,900,000원(금팔천팔백구십만원)

○ 계약년월일 : 2017. 3.13.(착수일:2017.3.14.)

○ 준공예정일 : 2018. 3. 8.

2. 요청내용

○ 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	'17.3.14.~‘18.3. 8	'17.3.14. ~'18.3.28	20일연장

나. 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 자전거도로 구축노선중 일부노선(서강로)에 대한 사업시행부서(마포구)의   해당지역 시.구의원 및 지역주민에 대한 설명회 개최요청에 따른 행정소요 기간 필요

※『서강로 자전거도로 구축사업』관련 의견회신(마포구 교통행정과-66315, 17.12.05)

- 과업노선(서강로)에 대한 시․구의원 및 주민설명회 개최(2018.02.26. 서강동주민센터)에 따른 사업시행부서(마포구)와 실시설계 협의기간 필요

- 자전거도로 구축사업의 원만한 수행을 위하여 용역 준공기한을 연장하여,  용역수행에 만전을 기하고자 함.

2018. 3.

자전거정책과장  김 미 정 (인)

서울특별시 경리관 귀하