준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 :  차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역

나. 계약업체 : ㈜이산 외 3 개사

다. 계약금액: 금1,464,700천원(※ 기성금 1,100백만원 지급)

라. 계약년월일 : 2016.  4. 15.

마. 착수년월일 : 2016.  4. 20.

바. 준공기한 :  2018.  3. 31.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2018. 6. 30.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

-  자문회의시(2.27) 제시된 유관기관(부서) 협의내용 검토반영, 설계VE 예산확보 후(‘18.3.9) 설계VE 시행(3.19~4.5), 건설기술심의에 필요한 소요기간 부족

2018년  3월 26일

물재생시설과  이 인 근(인)

서울특별시(분임)경리관 귀하