준공(납품)기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 중림동 창고 설계용역

나. 계약업체 : 건축사사무소 에브리아키텍츠

다. 계약금액 : 금52,250,000원(금오천이백이십오만원)

라. 계약년월일 : 2018.02.09.

마. 착공년월일 : 2018.02.09.

바. 준공기한 : 2018.06.08.

2. 위 공사(용역, 물품)의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2018.06.22.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시(공공재생과)

다. 지체상금 부과여부(부과, 미부과) : 미부과

라. 연기사유 : 공용건축물 협의 중 관계부서 보완요청에 따른 소요기간 연장 필요

첨부 : 연기사유 증빙자료 1부.

2018 년    06 월   07  일

담당   직급 : 시설7급         성명 :  유우린        (서명 또는 인)

팀장   직급 : 시설5급         성명 :  정병익        (서명 또는 인)

부서장  직급 : 시설4급         성명 :  김지호        (서명 또는 인)

서울특별시(분임)재무관 귀하