준공기한 연기의뢰서

1. 용역개요

○ 용 역 명 : 낙원상가 공용공간 개선기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : 2017. 12. 20. ~ 2018. 6. 20.

○ 계약금액 : 180,000,000원

○ 계약업체 : ㈜조진만건축사사무소 대표 조진만 외 2

2. 준공기한 연기

○ 준공기한

- 당초 : 2017. 12. 20. ~ 2018. 6. 20.

- 변경 : 2017. 12. 20. ~ 2018. 8. 31.

○ 귀책사유: 서울특별시

○ 지체상금 부과 여부: 미 부과

○ 연기사유

- 전문가 자문회의, 자치구 자문 등 설계 내실화를 위한 절차이행 및 주민동의를 위한 사전절차 기간증대에 따라 계약기한을 연기하고자 함

2018. 6.

역사도심재생과장  양 병 현 (인)

서울특별시 경리관 귀하