준공기한 연기의뢰서

1. 용역개요

○ 용 역 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간: 2017. 9. 20. ～ 2018. 6. 20.

○ 계약금액: 442,000,000원

○ 계약업체: ㈜동해종합기술공사

2. 준공기한 연기

○ 준공기한

- 당초: 2017. 9. 20. ~ 2018. 6. 20.

- 변경: 2017. 9. 20. ~ 2018. 8. 31.

○ 귀책사유: 서울특별시

○ 지체상금 부과 여부: 미 부과

○ 연기사유

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 정비에 대한 각 가로별 기본설계의 논의(가로수 정비 등)가 길어져 결정이 늦어지고 제7대 전국동시 지방선거로 인한 주민설명회를 60일간(4. 14.~6.13.) 개최할 수 없어 전체적인 행정 절차(심의 등)가 지연됨에 따라 절대공기 부족으로 준공기한을 연기하고자 함.

2018. 6.

역사도심재생과장  양 병 현 (인)

서울특별시 경리관 귀하