준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

○ 공  사  명 : 종로6가 교통안전시설 및 조업공간 설치공사

○ 도  급  자 : ㈜치산치수 대 표 : 박 흥 자

○ 계 약 금 액 : 금11,430,000원(금일천일백사십삼만원)

○ 계약년월일 : 2018. 6. 29.(착수일:2018.6.29.)

○ 준공예정일 : 2018. 7. 18.

2. 요청내용

○ 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	'18.06.29.~‘18.07.18	'18.06.29 ~'18.07.28	10일연장

나. 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

○ 종로 자전거전용차로 시설보완 계획 보고(자전거정책과-6922,18.07.06)에    따른 시공물량 증가사유 발생

- 종로4사 P턴구간 보도 턱낮춤 및 녹지대 정비 1식

- 종로4가 교차로 자전거도로 교차로횡단 노면표시 및 유색포장

○ 종로 자전거전용차로 시설보완 계획에 따라 공사시행에 만전을 기하기 위하여    공사 준공기한을 연장하고자 함

2018. 07.

자전거정책과장  김 미 정 (인)

서울특별시 경리관 귀하