준공기한 연기의뢰서

1. 용역개요

가. 용 역 명: 남산 북측순환로 건설폐기물 처리용역

나. 계약업체: ㈜유진개발 대표자 현광복외 1

다. 계약금액: 금47,355,000원

라. 계약일자: 2018. 2. 8

마. 착 수 일: 2018. 2. 8

바. 준공기한: 2018. 9. 6

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한

- 당 초: 2018. 9. 6

- 변 경: 2018. 9. 17

나. 연기사유 귀책소재: 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부: 미부과

라. 연기사유

「남산 북측순환로 노후 탄성 포장 정비공사」 준공기한이         연기됨에 따라 공사장에서 발생되는 건설폐기물의 원활한         처리를 위하여 용역기한을 연기하고자 함.

2018. 9.

확인자: 시설과장 김 재 균 (인)

서울특별시 중부공원녹지사업소 (분임)재무관 귀하