준공기한 연기의뢰서

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기공사

(등촌삼거리)-강서

나. 공사기간 : 2018. 12. 18 ~ 2019. 3. 17

다. 도 급 비 : 128,806,040원

라. 계 약 자 : ㈜ 다산지앤지

2. 상기 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

○ 당  초 : 2018. 12. 18 ~ 2019. 3. 17

○ 변  경 : 2018. 12. 18 ~ 2019. 5. 17

나. 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 강서도로사업소(기전과)

다. 지체상환금 부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

○ 2019년 도로교통 안전개선사업 교통신호기 감리용역 미선정에

따른 절대공기 부족(교통운영과 4월 감리용역 발주예정)

2019.  3.

작성자 : 전기7급         김 동 기 (인)

확인자 : 기전과장         서 승 완 (인)

서울특별시 경리관 귀하