준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 새남터·이촌2동 보행육교 개선사업 기본 및 실시설계 용역

나. 계약업체 : 태조엔지니어링(대표자 한명식)

다. 계약금액 : 금일억삼천오백칠십구만원정(￦135,790,000원)

라. 계약년월일 : 2019. 02. 14

마. 착수년월일 : 2019. 02. 20

바. 준 공 기 한 : 2019. 11. 21

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2019. 11. 21

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 도시디자인심의 및 특정공법(제품) 심의 일정 지연

2019년   09월    일

기반시설과장  라철흠  (인)

한강사업본부(분임)경리관 귀하