준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명: 월드컵공원 장미원 조성사업

나. 계약업체: ㈜충림종합기술

다. 계약금액: 금249,017,870원

라. 계약년월일: 2019. 08. 08.

마. 착공년월일: 2019. 08 .13.

바. 준공기한: 2019. 11. 10.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한: 2019. 11. 30.

나. 연기사유 귀책소재: 서부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부: 미부과

라. 연기사유: 서울억새축제 및 공원이용성수기 시민이용편의를 고려한 10월 한달간 공사 중단으로 인한 공사 지연 일수 발생

첨부  준공기한 연장 검토보고서 1부.  끝.

2019년   11월     일

담당: 김은희   직급: 녹지7    성명: 김은희   (서명 또는 인)

팀장: 고봉채   직급: 녹지6    성명: 고봉채   (서명 또는 인)

부서장: 공원운영과장  직급: 녹지5    성명: 배효성   (서명 또는 인)

서울특별시(분임)재무관 귀하