준공(납품)기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 하천관리 모니터링 용역

나. 계약업체 : 서울하천네트워크

다. 계약금액 : 금87,115,000원(금팔천칠백일십일만오천원정)
라. 계약일자 : 2019. 5. 23.

마. 착수일자 : 2019. 5. 23.

바. 준공기한 : 2019. 12. 20.

2. 위 용역의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여  주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2020. 4. 20.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

○ 당초 용역계약 시 봄철(1~4월) 생태현황조사가 포함되어 있지 않았는 바, 과업기간 연기를 통해 봄철 생태현황조사를 시행하고,

○ 과업내용 조정에 따른 전문가 자문 및 하천생태관련 시민단체 의견수렴 등을 위한 준비기간이 필요하여 용역 준공기한을 연기코자 함

2019년   12월   일

하천관리과장 한유석 (인)

서울특별시(분임)경리관 귀하