준공(납품)기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 보행환경개선 디자인 제작 용역

나. 계약업체 : 아트앤트레이드

다. 계약금액 : 금37,999,500원정(금삼천칠백구십구만구천오백원정)

라. 계약년월일 : 2023. 5. 30.

마. 착공년월일 : 2023. 5. 30.

바. 준공기한 : 2023. 10. 31.

2. 위 공사(용역, 물품)의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2023. 11. 30.

나. 연기사유 귀책소재 : 발주기관의 필요 (공정계획 변경)

다. 지체상금 부과여부(미부과)

라. 연기사유 : 거리가게 디자인 가이드라인(안) 재심의 상정을 위한 준공기한 연장

첨부 : 연기사유 증빙자료 1부.

2023 년  10 월  24 일

담당 :       주무관   직급 : 시설7급  성명 : 조우성   (서명 또는 인)

팀장 : 보도관리팀장   직급 : 시설5급  성명 : 조성건   (서명 또는 인)

부서장 : 도로관리과장   직급 : 시설4급  성명 : 김만호   (서명 또는 인)

서울특별시(분임)재무관 귀하