준공기한 연기의뢰서

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 금천교내진성능개선공사

나. 공사개요 : 교좌장치교체 220개소

다. 공사기간 : 2013.05.02 ～ 2014.02.28

라. 공 사 비 : 1,659,104,590원(도급비 1,483,708,700원 관급비 175,395,890원)

마. 도 급 자 : 만국건설(주) 대표 김효순

바. 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단 (이동호)

2. 상기 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기

구 분	준 공 기 한	비 고
당 초	2013.05.02 ~ 2014.02.28
변 경	2013.05.02 ~ 2014.03.31	증31일

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

철도저촉구간 작업에 대한 한국철도시설공단 협의결과(3월중 작업가능) 작업 지연에 따른 절대공기 부족으로 준공기한 연기가 불가피한 실정임

2014. 02.

작성자 : 남부도로사업소 지방시설주사   정 규 용 (인)

확인자 : 남부도로사업소 시설보수과장   김 찬 구 (인)

서울특별시 경리관 귀하