준공기한 연기의뢰서

1. 계 약 내 용

가. 사 업 명 : 용허리공원 빗물저류조 설치공사

나. 계약업체 : 케이월드종합건설(주)외 1

다. 계약금액 : 금7,625,521,000원(2차 4,831,766,000원)

라. 계 약 일 : 2012. 12. 18(2차 '13.04.16)

마. 착 공 일 : 2012. 12. 21(2차 '13.04.16)

바. 준공기한 : 2014.  5. 30

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 내역

구 분	준공기한		비 고
	당 초	변 경
총 차	'12. 12. 21 ~ '14. 5. 30	'12. 12. 21 ~ '14. 9. 30	123일 연장
2차	'13. 4. 16 ~ '14. 5. 30	'13. 4. 16 ~ '14. 9. 30	123일 연장

나. 귀책사유 : 도시기반시설본부

다. 지체상금 : 미부과

라. 연기사유

○ 용허리공원 빗물저류조 설치공사 시공 중 유지관리 기관인 서초구청에서 공연장설치, 운동공간 조성, 수경시설 조성 등 요구사항이 있어 추가공사로 인한 절대공기가 부족하여 공사(총차, 2차) 준공기한을 연기코자 함.

2 0 1 4.  5.

방재시설부장(인)

서울특별시(분임)경리관 귀하