준공기한 연기 조치 의뢰서

1. 계 약 내 용

가. 공 사 명 : 서초역~방배로간 도로개설공사

나. 계약업체 : 롯데건설(주)

다. 계약금액 : 44,158백만원(1차분 3,822백만원)

라. 계 약 일 : 2015.10. 8.

마. 착 공 일 : 2015.10.20

바. 준공기한 : 2019. 1.31(1차분 2015.12.18)

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 내역

- 총 차 : 당초 ′15.10.20 ~ ′19. 1.31(변경없음)

- 1차분 : 당초 ′15.10.20 ~ ′15.12.18 → ′15.10.20 ~ ′16.10.19(305일 연장)

나. 귀책사유 : 도시기반시설본부

다. 지체상금 : 미부과

라. 연기사유

- 본 사업의 장기계속계약 1차(계약금 3,822백만원) 계약기간을 계약일로부터 12개월(365일)로 산정하였으나 나라장터 시스템 입력시 계약일로부터 60일로 입력 오류가 발생되어 계약금액 변경 없이 당초 산정한 계약기간으로 공사기간을 변경하고자 준공기한을 연기하고자 함.

2 0 15.12.

방재시설부장  임 춘 근 (인)

서울특별시(분임)경리관 귀하