준공기한 연기 조치 의뢰서

1. 계 약 내 용

가. 용 역 명 : 서초역~방배로간 도로개설공사 건설폐기물 처리용역(3차)

나. 계약업체 : ㈜ 건용환경개발

다. 용역금액 : 72,887,000원(총차 509,508,400원)

라. 계 약 일 : 2017.7.3

마. 착 수 일 : 2017.7.4

바. 준공기한 : 2018.7.3

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 내역

- 당초 : 2017.7.4 ～ 2018.7.3

- 변경 : 2017.7.4 ～ 2018.10.19(108일 연장)

나. 귀책사유 : 도시기반시설본부

다. 지체상금 : 미부과

라. 연기사유

- 시점부(내방역측) 다수민원 발생으로 공정계획에 차질이 발생되어 3차 계약물량의 집행시기 미 도래로 용역기간을 연기하고자 함.

2 0 18. 7.

방재시설부장  이 임 섭   (인)

도시기반시설본부(분임) 경리관 귀하