준공기한 연기조치 의뢰서

1. 용역현황

ᄋ 용 역 명 : 양재대로 녹지연결로조성 기본 및 실시설계

ᄋ 위    치 : 강남구 개포동 1274번지 일원

ᄋ 규    모 : 녹지연결로(신설) 폭20m, 연장54m

ᄋ 용역기간 : ‘15. 6. 19 ~ '15. 12. 31

ᄋ 계약금액 : 192,330천원

ᄋ 용 역 사 : ㈜유신 대표 성 낙일

2. 위 용역기한을 아래와 같이 연기조치 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

ᄋ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2015.06.19.~2015.12.31	2015.06.19.~2016.02.29

- 지체상금 : 미부과

ᄋ 연기사유

- 본 용역을 2015.6.19.일 계약체결하여 과업수행을 진행중이나, 잔여 과업수행인 설계자문회의,도시공원심의,건설기술심의 등 행정절차 이행에 따른 설계과업기간이 부족하여 과업수행 기간을 2016.2.29.일까지 연기를 하고자 함.

2015.  12.  10.

토목부장   노 우 성

도시기반시설본부 경리관 귀하