준공기한 연기조치 의뢰서

1. 공사내용

가. 공 사 명 : 서울숲공원 유아숲체험장 조성공사

나. 도 급 액 : 금82,179,000원(일금팔천이백일십칠만구천원)

다. 도 급 자 : (주)태원녹화양행 대표 김규태

라. 계 약 일 : 2015. 08. 12

마. 착 수 일 : 2015. 08. 17

바. 준공기한 : 2015. 10. 26

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 준공기한

ㅇ 당 초 : 2015. 08. 12 ~ 2015. 10. 26

ㅇ 변 경 : 2015. 08. 12 ~ 2014. 11. 06

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소 (서울숲공원)

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 준공기한 연기사유

- 현재 공정율 90% 공사 마무리 단계로 시설이용 안전관련 추가 설계변경

사항이 발생하여 공사를 위한 절대공기가 부족함.

2015.   10.    .

동부공원녹지사업소 서울숲공원관리소장 배정복 (인)

서울특별시 동부공원녹지사업소 경리관 귀하