준공기한 연기조치 의뢰서

1. 공사개요

공 사 명	공 사 개 요	공사기간	계약금액(원)	계 약 자
강남터미널고가 보수공사(4차)	방호벽 재설치 1,013m 신축이음장치 28.8m 등	2014.6.11 ~ 2014.12.7	1,157,031,300	예신건설(주) 대표 이혜경

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기코자 합니다.

가. 준공연기기한 : 2014. 12. 22

나. 준공기한 귀책사유 : 남부도로사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 준공기한 연기사유

○ 교통처리 협의 지연으로 공중비계 및 낙하물방지망 해체작업을 위한 절대공기 부족

2014. 12.

확 인 자 : 남부도로사업소 시설보수과장  김 찬 구 (인)

서울특별시 (분임)경리관 귀하