준공기한 연기조치 의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 금천구 박미사랑공원 지장물철거공사

나. 계약금액 : 금116,209,900원정(금일억일천육백이십만구천구백원)

다. 계 약 자 : 강남건영(주) 대표 신승호

라. 계약일자 : 2017. 8. 17.

마. 준공기한 : 2017. 11. 15.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 준공기한 : 2017. 12. 30.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

다. 지연배상금부과 여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

○ 진성연립 A동 미이주 1세대 명도소송 및 이주협의가 진행 중이며, 명도소송 선고 예정(2017. 11. 23.)에 따른 준공기한 연기가 필요함.

2017. 11.  .

시설과장  임 병 국 (인)

서울특별시 서부공원녹지사업소 경리관 귀하