준공기한 연기조치 의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 선유도공원 유리온실 리모델링공사(건축)

나. 계약금액 : 금247,161,000원정(금이억사천칠백일십육만일천원)

다. 계 약 자 : 륜덕종합건설 주식회사 대표 이강태

라. 계약일자 : 2019. 11. 25.

마. 준공기한 : 2020. 7. 30.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 준공기한 : 2020. 9. 11.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

다. 지연배상금부과 여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

○ 현재 진행 중인 조경분야 공사 완료 후 창호 및 출입문 마감공사가 진행되어야 함에 따라 준공기한 연기가 필요함.

2020. 7.  .

시설과장  문 인 기 (인)

서울특별시 서부공원녹지사업소 경리관 귀하