준공기한 연기 검토 내용

1.공사현황

가. 공 사 명 : 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사

나. 공사기간 : 2015년 4월 20일 ~ 2015년 10월 30일

다. 도 급 액 : 749,384,000원

라. 도 급 자 : 아이서비스(주) 김세민

마. 발 주 처 : 중부공원녹지사업소 시설과

2. 검토내용

가. 준공기한 연기사유

○ 발주처에서 안전시설 설치 및 포기자 대피소 추가설치 시 안전성 등 대한

검토를 요청하였으며

○ 개인 안전장비(하네스, 헬멧, 세이프롤러 등) 각 10셋트 씩 추가 공사 반영을

요청함.

나. 준공기한 연기(31일)

○ 당 초 : 2015. 04. 20 ~ 2015. 10. 30

○ 변 경 : 2015. 04. 20 ~ 2015. 11. 30

다. 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.