준공기한 연기 검토 내용

1.공사현황

가. 공 사 명 : 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성사업

나. 공사기간 : 2015년 4월 20일 ~ 2015년 10월 16일

다. 도 급 액 : 749,384,000원

라. 도 급 자 : 아이서비스(주) 김세민

마. 발 주 처 : 중부공원녹지사업소 시설과

2. 검토내용

가. 준공기한 연기사유

○ 상징안내판 시안변경(안내판 다국어 표기 검증기간 소요), 시운전 기간소요

나. 준공기한 연기(14일)

○ 당 초 : 2015. 04. 20 ~ 2015. 10. 16

○ 변 경 : 2015. 04. 20 ~ 2015. 10. 30

다. 연기에 따른 귀책소재 : 발주처

라. 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.