보 고 서
			담당	차장	팀장	공사감독2처장
						12/05
문서번호	공사감독2처-20993
보존기간	영구		협 조
결재일자	2014.12.05.
공개여부	공개
제 목	준공기한 연기 검토보고(동호대교)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 동호대교 남단 진입램프 개량공사

나. 공사기간 : 2014. 7. 16 ~ 2014. 12. 12

다. 도 급 액 : 9,55,488,880원

라. 공사개요 : 슬래브 철거 및 재설치 B=7.6m, L=60m

가설교량 설치 및 철거 B=6.0m, L=60m

신축이음장치 교체 3개소 L=20m

교면방수 및 포장 9.5@,     기타 1식

마. 도 급 자 : (주)두양종합건설 대표 김병주

바. 발 주 청 : 성동도로사업소 교량보수과

2		보고내용

가. 준공기한 연기사유

1) 수방기간 사유로 한강점용 허가 지연(교량보수과-3004,2014.09.30)

- 점용승인일자 : 2014.09.30

- 연기일수 : 40일

2) 가도성토 수량 증가로 인한 토공사 기간증가,실정보고사항

(공사감독2처-18673, 2014.11.03)

- 소요기간 : 토사반입 11일, 토사반출 27일

- 연기일수 : 38일(11일+27일)

3) 지장물(상수도관)로 인한 가설교량 선형변경 검토

(설계사 검토요청 및 관계자 회의 등 시행)

- 소요기간 : 2014.10.31 ~ 2014.12.02

- 연기일수 : 33일

4) 중요 구조물 품질확보를 위한 동절기 콘크리트 타설 연기

- 동절기 기간 중 콘크리트 타설 금지(2014.11.15 ~ 2015.03.15)

- 2015.03.15 이후 콘크리트 타설예정

- 연기일수 : 기간 중 28일

나. 준공기한 연기내용

○ 연기 적용일수 : 139일 반영

구 분	당 초	변 경
	2014. 07. 15 ~ 2014. 12. 12	2014. 07. 15 ~ 2015. 04. 30

다. 지체상금 부과여부 : 미 부 과

3		처리의견

상기와 같이 수방기간 및 지장물로 인해 절대공기 부족사태 발생되었고, 연관 공사인 성토,가시설설치 등 타 공종 착공이 지연됨에 따라 콘크리트 타설공종이 동절기 기간내 해당 됨, 그러나 품질확보 차원에서 동절기 중

타설하지 않고 2015.03.15 이후에 타설하고, 최종 토사 반출하는 공정계획은 적정한 판단이며, 이에 따른 공기연장도 타당하다고 사료 됨.

4		행정사항

- 상기 내용을 발주청에 보고하고 조치결과에 따라 처리코자 함.

붙 임 : 관련서류 1부.  끝.