문서번호	설비부-704
결재일자	2018.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
협조

『종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사』

준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 1.

설  비  부

『종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사』

준공기한 연기 검토보고

「종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사」관련, 사업 주관부서로부터 공사 연기 요청이 있어 검토하고 보고 드림.

□  공사개요

공 사 명 : 종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사

위    치 : 종로구 세종대로 교차로~동묘앞역 교차로

공사기간 : 2017. 9.13 ~ 2018. 2.28.

사 업 비 : 19억(도급비 823, 관급비 235, 이전비 855)

규    모 : 신호등 설치 40개소, 가로등 이설 8개소 등

시 공 사 : 대현산업기술(주)

□  검토배경

전기공사 연기 요청〔(교통운영과-1027호(`18.1.16)〕

- 교통여건 안정화 시 까지 전기공사 연기(약 1개월)

□  공사 추진현황

구 분	단위	계획	완료	잔여	잔여공사 소요기간
신호등주 설치	본	40	26	14	총 45일 전기공사 : 30일 뒷마무리 : 15일
신호등주 철거	본	14	-	14
신호제어기 설치	면	6	5	1
콘크리트 기초설치	개소	49	49	-
맨홀 설치	개소	69	69	-
분전반 설치	면	10	10	-
가로등주 이설	본	8	8	-

□  준공기한 연기 검토

공사 연기요청 내용

- 요청부서 : 교통운영과(`18.1.16.)

- 연기기간 : 약 1개월

- 요청사유 : 변화된 교통체계 등으로 인해 시민불편이 지속적으로 발생함에 따라

교통여건이 안정화될 때까지 공사 연기

준공기한 연기 검토

- 잔여공사 소요기간 : 약 45일

- 공사중지 예정기간 : 35일(1.15 ~2.19)

- 토목공사 준공일자 : `18. 4.30(예정)

구 분	준공기한			연기사유
	당초	변경	증·감
전기공사	`18. 2.28	`18. 4.30	증)61일	교통여건 개선 시 까지 공사중지 주 공종(토목) 준공 예정시기에 맞게 전기공사 연기 ※ 귀책사유 : 발주처

□  보고자 의견

상기와 같이 준공기한을 연기하고자 하며 중지기간 중에는 상주감리를 미 배치코자 함.