보 고 서
			담당
문서번호	공사감독2처-@N
보존기간	3년		협 조
결재일자
공개여부	공개
제 목	준공기한 연기 검토보고(중랑교 보수보강)

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 중랑교 보수보강공사

나. 공사기간 : 2013년 5월 2일 ~ 2014년 12월 31일(2차:13.5.2~14.6.27)

다. 도 급 액 : 3,021,010,230원 (2차 계약금액 : 1,790,463,200원)

라. 공사개요 : 교면포장(smat con) 2,982㎡, 슬래브강결 154m

난간철거 및 재설치 308m, 신축이음교체 200m

교량받침교체 168개소

마. 도 급 자 : 유성건설주식회사  대표 이영주

바. 발 주 청 : 성동도로사업소(시설보수과)

2. 보 고 내 용

◯ 위 공사를 시행하던 중 도급사로부터 준공기한 연기요청(유성건설 2014 – 중랑 63호, 2014.6.17)이 있어 검토보고함.

가. 공사진척 현황(현재 공정율 : 74%)

나. 준공기한 연기사유 검토

(실정보고서 승인 성동도로사업소 시설보수과-1952호관련 ‘14.5.22)

○ 신규공종(신축이음 덮개설치)발생으로 공기연장 필요 ⇒  18일

○ 슬래브하부 성능개선과 관련한 전기시설물(수방용 펌프선)

이설지연으로 공기연장 필요                       ⇒  16일

○ 관련근거(펌프인입선 이설대상 사진)

펌프인입선 이설전	펌프인입선 이설전

다. 준공기한 연기요청 내용

연기요청 일수	2차 공사기간(당초)	공사기간(변경)
34일	2013. 5. 2 ~ 2014. 6. 27	2013. 5. 2 ~ 2014. 7. 30

○ 연기 요청일수(34일)가 적정하다고 판단됨

○ 지체상금 부과여부 : 미 부 과

□ 조 치 사 항

- 상기 내용을 발주처에 보고하고, 회신결과에 따라 조치코자 함.

붙 임 : 관련서류 1부.  끝.