문서번호	시설과-961
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
협조
	주무관

준공기한 연기 검토 보고

[서울대공원 백두산호랑이숲 조성사업 전기시설 개선공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

시 설 과

준공기한 연기 검토 보고

[서울대공원 백두산호랑이숲 조성사업 전기시설 개선공사]

『서울대공원 백두산호랑이숲 조성사업 전기시설 개선공사』와 관련하여   시공사로부터 준공기한 연기 요청건에 대하여 아래와 같이 검토하고 보고 드림.

[JK********4(2014.02.14)]

공사개요

○ 공 사 명 : 서울대공원 백두산호랑이숲 조성사업 전기시설 개선공사

○ 공사기간 : 2013.05.06 ~ 2014.2.28

○ 계 약 자 : (주)제이케이넷 대표 이중구

○ 계약금액 : 일금 일억일백일십오만육천칠백구십원정(₩101,156,790원)

○ 공사내용

- 옥외 전력간선 및 조명설비 공사

- 옥외 관람대 조명 및 보안등 설비 공사

- 전책 및 동력설비 공사

요청내용

○ 준공기한 연기 요청

구 분	당 초	변 경	비고
공사기간	‘13.05.06～’14.2.28	‘13.05.06～’14.4.30

○ 요청사유

- 선행공정(조경분야) 지연과 AI로 인해 공기 연장

검토의견

○ 본 공사는 전책, 공원등 및 케이블 개량 등을 시행하는 공사로 방사장 및 수경설비, 관람로 등이 선행되어야 가능한 후속 공정인 바, 조경분야 공사가 사고이월로 인해 `14.2월말까지 공사 완료가 곤란할 것으로 판단되며

○ 특히 겨울철 공사(강추위, 적설 등) 중지, AI로 인해 절대공기 부족으로 추가적인 공사기간 확보가 필요할 것으로 사료됨

조치계획

○「서울대공원 백두산호랑이숲 조성사업 전기시설 개선공사」건에 대하여 개원 30주년 행사가 `14.5월로 예정되어 있어 준공기한을 아래와 같이 연기코자 함

□ 준공기한 :   당초 2014.2.28    ⇒    변경 2014.5.30

□ 지체상금 부과여부: 미부과

행정사항

○ 계약부서에 준공기한 연기의뢰(시설과 ⇒ 총무과) 조치.

붙임 : 1. 시공사 관련 공문 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.