보 고 서
			담당	팀장	공사감독2처장
					09/26
문서번호	공사감독2처-15978
보존기간	준영구		협 조	나급
결재일자	2014.09.26.
공개여부	공개
제 목	준공기한 연기 검토 보고

1		공사현황

가. 공 사 명 : 합정동 433-1호 외 4개소 세척갱생관 정비공사

나. 공사기간 : 2014. 4. 14 ~ 2014. 10. 10

다. 공사개요 : D=20~300mm, L=1,112m

라. 도 급 액 : 229,834,980원

마. 발 주 청 : 서부수도사업소(급수운영과)

바. 시 공 사 : 고천건설(주) 대표이사 윤영선

2		보고내용

고천 제2014-9-25(2014.09.25)호와 관련하여 도급자로부터 준공기한 연기원이 제   출되어 다음과 같이 검토보고 합니다.

가. 공정현황

1) 공정율 : 80%  【2014. 09. 25. 현재】

2) 작업완료사항 : 1구간(합정동) D=20~200mm, L=280m

2구간(서교동) D=20~150mm, L=250m

4구간(성산동) D=20~200mm, L=110m

5구간(성산동) D=20~150mm, L=170m

3) 잔여작업사항 : 3구간(서교동) D=20~150mm, L=230m

나. 준공기한 연기요청 내용

1) 준공연기 사유

- 도로점용 허가지연으로 인한 절대공기 부족 - 31일

※ 관련근거 : 마포구-2014-상수-00076(2014.8.28.)

2) 준공기한 연기 요청일

- 당초 : 2014. 04. 14. ~ 2014. 10. 10.

- 변경 : 2014. 04. 14. ~ 2014. 11. 10. (31일 연기)

3		검토내용

가. 검토 의견

- 도로점용 허가지연(마포구청) → 지연일수 62일

※ 지연일수 중 잔여구간 실소요기간 반영 31일 신청

나. 준공기한 연기 검토 결과

1) 준공기한 연기 사유

- 도로굴착 승인지연으로 인한 절대 공기부족

2) 준공기한 연기

- 당초 : 2014년 10월 10일

- 변경 : 2014년 11월 10일 (추가 31일)

3) 귀책사유 : 발주청

4) 지체상금 부과여부 : 미부과

4		조치의견

- 상기 보고내용을 발주청에 보고하고 그 결과에 따라 조치하고자 함.

따로붙임 : 1. 준공기한 연기원 1부.

2. 연기사유서 1부.

3. 공사예정공정표 1부.

4. 도로점용허가증 1부.  끝.