문서번호	시설개선과-23
결재일자	2015.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설개선과장
협 조

준공기한 연기 보고

2015. 01.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

준공기한 연기 보고

『서울종합운동장 남문환경개선사업 폐기물처리용역』시행중 준공기한 연기사유가 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

❍ 서울종합운동장 남문환경개선사업 공사기간 연장 시행【시설개선과-10038(2014.12.19)】

Ⅱ		사업개요

❍ 건    명 : 서울종합운동장 남문환경개선사업 폐기물처리용역

❍ 계 약 자 : 협신자원(주) 대표 오원석

❍ 계약금액 : 15,631,000원

❍ 공사기간 : 2014.11.27.~2015.01.19.

❍ 공사개요 : 폐콘 675.51ton, 혼폐 3.36ton

Ⅲ		준공기한 연기

❍ 연기사유 : 본공사 연기에 따른 준공기한 연기

❍ 준공기한 연기내용

․ (당초) 2015.01.19. → (변경) 2015.03.31.

Ⅳ		조치의견

❍ 위와 같이 준공기한을 연기하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 남문환경개선사업 공사기간 연장 시행문 1부. 끝.