문서번호	시설보수과-2156
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	성동도로사업소장

준공기한 연기보고서 승인 검토

(옥수·금호터널 보도차단벽 설치공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

성동도로사업소

(시설보수과)

옥수·금호터널 보도차단벽 설치공사

준공기한 연기보고서 승인 검토

『옥수·금호터널 보도차단벽 설치공사』 감독업무를 수행중인 서울시시설관리공단으로부터 공사 준공기한 연기보고서가 접수되어 준공기한 연기 승인에 대한 검토 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 옥수·금호터널 보도차단벽 설치공사

○ 공사기간 : 2014.12.12 ~ 2015.12.21(총차)

(1차: 2014.12.12 ~ 2015. 6.30)

○ 공사개요 : 보도차단벽 설치 960m

(옥수터널 : 320m, 금호터널 : 640m)

○ 도 급 액 : 449,318,250원(1차 - 257,000,000원)

○ 도 급 자 : (주)이유디자인 대표이사 박종근

□ 보고내용(공사 실정보고 및 승인요청 사항)

가. 관련근거 : 서울시시설관리공단 공사감독2처-8066(2015. 6.16.)호

⇒ 준공기한 연기 검토보고

나. 터널 연장증가 및 설계사 의견조회에 따른 추가공정 발생

① 설계사 의견조회 요청[공사감독2처-2523(2015.03.19)]

- 터널 실측 수량 및 기존 배수로 대체 방안 검토

② 설계사 의견조회에 따른 실정보고[공사감독2처-2737 (2015.03.25)]

- 실측수량 증가와 추가공정에 따른 추후 공기연장 검토 필요

※ 지연일수 : 37일 (당초 보도블록 시공기간 15일 제외)

- 기존 배수로 존치에서 의견조회 결과에 따른 철거 : 5일

- 보도블록 하단부 버림 콘크리트 및 추가 잔토 발생에 따른 깨기 및 반출 : 18일

- 당초 보도블록 설치에서 무근콘크리트 타설로 변경에 따른 거푸집 설치 및 타설 : 17일

- 배수로 트랜치 제작 및 설치 : 5일

- 설계사 의견 검토 및 승인일 소요 : 7일

다. 철근 배근관련 설계사 의견조회에 따른 추가공정 발생

① 설계사 의견조회 요청[공사감독2처-5401(2015.05.14)]

- 현장여건과 상이한 철근배근 구조검토

② 설계사 의견조회에 따른 실정보고[공사감독2처-6146 (2015.05.26)]

- 설계사 의견조회 및 안정성 검토기간 필요 추후 공기연장 검토 필요

※ 지연일수 : 34일(철근배근 관련 구조검토 및 추가공정)

- 추가 케미컬 앵커 시공 및 철근가공조립 수량 증가 : 16일

- 옹벽 철근 정착을 위한 공동구 바닥 콘크리트 타설 : 4일

- 설계사 의견 검토 및 승인일 소요: 14일

라. 레미콘 타설관련 경찰서 협의기간

① 흥국산업(주) 레미콘 수급관련 회신공문[흥국 2015-0309호 2015.03.09)

② 서울, 경인 레미콘 조합 회신공문[서경(사) 제40호 (2015. 03.16)]

③ 레미콘 수급관련 서울지방조달청 회신공문[자재구매과-4827 (2015.03.19)

④ 레미콘 수급관련 경찰서 도로공사 신고 승인 협의

- 도로공사 신고 확인서 경찰서 승인일 2015.04.17

※ 지연일수 : 33일(중복검토기간 7일 제외)

※ 총 지연일수 : 104일(37일+34일+33일)

마. 준공기한 연기요청 내용 : 72일

당 초 : 2014. 12. 12 ~ 2015. 06. 30(1차분)

변 경 : 2014. 12. 12 ~ 2015. 09. 10(1차분)

□ 조치의견

○ 감독기관인 서울시시설관리공단에서 제출한 준공기한 연기 보고사항을 검토한 결과, 타당하다고 판단되므로 준공기한 연기를 승인하고자 합니다.

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 준공기한 연기

· 총차 : 변경 없음

· 1 차 : 당초 준공기한 : 2015.6.30.

변경 준공기한 : 2015.9.10.(증72일)

붙임 : 준공기한 연기 관련 문서 각 1부.  끝.