“시민중심의 도시기반서비스를 창출하는 혁신 공기업”
		서울특별시시설관리공단
수신	중부공원녹지사업소장(시설과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(2차)

1. 중부공원녹지사업소 시설과-7367(2015. 10. 14)호 및 아이서비스 2015 -23(2015.10.15)호와 관련입니다.

2 우리공단에서 공사감독 수행중인 『중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사』와 관련하여 발주처 공사내용 변경 통보에 따라 시공사에서 준공기한 연기요청이 있어 준공기한 연기 검토결과를 송부하오니 검토 후 조치하여 주시기   바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사

나. 공사기간 : 2015. 4. 20 ~ 10. 16

다. 도 급 액 : 749,384,000원

라. 도 급 자 : 아이서비스 (주) 김세민

마. 검토결과 : 별 첨

별 첨 : 1. 준공기한 연기 검토내용. 1부.

2. 시공사 준공기한연기 요청 공문사본 1부.  끝.

3. 공사예정공정표(당초,변경)1부.  끝.

							서울특별시시설관리공단 이사장
										팀장
협조자
시행			공사감독3처-9991									(	2015.10.15.					)		접수			시설과-7421								(	2015.10.15.					)
우	133-050					서울특별시 성동구 청계천로 540															/			홈페이지
전화		02)2290-7230						/전송			02)2290-7267					/	mypark@sisul.or.kr												/	공개