“시민중심의 도시기반서비스를 창출하는 혁신 공기업”
	서울특별시시설관리공단
수신자	중부공원녹지사업소장(시설과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 요청

1. 중부공원녹지사업소 시설과-7829(2015. 10. 28)호와 관련입니다.

2 우리공단에서 공사감독 수행중인 『중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사』와 관련하여 발주처 추가공사 요청에 따라 시공사에서 준공기한 연기요청이 있어 준공기한 연기 검토결과를 송부하오니 검토 후 조치하여 주시기바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사

나. 공사기간 : 2015. 4. 20 ~ 10. 30

다. 도 급 액 : 749,384,000원

라. 도 급 자 : 아이서비스 (주) 김세민

마. 검토결과 : 별 첨

별 첨 : 1. 준공기한 연기 검토내용. 1부.

2. 시공사 준공기한연기 요청 공문사본 1부.

3. 공사예정공정표(당초,변경). 1부.  끝.

	서울특별시시설관리공단 이사장
담당자			팀장
협조자
시행	공사감독3처-@N	(	2015.10	)	접수		(		)
우	134-814	서울특별시 광진구 능동로 216	/	www.sisul.or.kr
전화	02-450-9321	/전송	02-456-9688	/이메일	lsawoon@daum.net	/	공개
비리신고 : www.sisul.or.kr ⇒ 신고센터, ☏ 02)2290-6234, 기업고객 불편신고/정보제공 : www.sisul.or.kr ⇒ 고객센터 ⇒ 「기업고객 도움센터」