준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 공  사  명: 장터길 확장공사 건설폐기물 운반 및 처리용역(장기계속) 2차

나. 용  역  비: 금83,277,000원

다. 도  급  자: 천우환경산업(주), ㈜장형기업

라. 계약년월일: 2021. 7. 1.

마. 착공년월일: 2021. 7. 1.

바. 준공기한: 2022. 4. 30.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 : 2022. 6. 30.

나. 연기 귀책소재 : 성동구청

다. 지체상금부과 대상 여부 : 미부과

라. 연기사유

- ‘장터길 확장공사’ 의 보상일정 지연 및 철거일정에 따른 공기 연장으로 인해 준공기한이 연장됨에 따라 폐기물 용역 준공기한 연장

2022.  4.

토목과장    이 호 진   (인)

성동구(분임)재무관  귀 하