준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 공 사 명 : 장터길 확장 공사(장기계속) 2차

나. 계약금액 : 842,039,000원

다. 계 약 자 : 오송종합건설 주식회사 대표 곽명기

라. 계약년월일 : 2021.  7.  1.

마. 착공년월일 : 2021.  7.  1.

바. 준공기한 : 2022.  4. 30.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 : 2022.  6. 30.

나. 연기 귀책소재 : 성동구청

다. 지체상금부과 : 미부과

라. 연기사유 : 도로확장에 따른 주민이용실태 분석 및 추가 요구사항 반영

2022.  4.    .

토목과장    이  호  진  (인)

성 동 구 청 장  귀 하