준공기한 연기 의뢰서

1. 계 약 내 용

가. 공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

나. 계약업체 : 백상건설(주)외 2개사

다. 도 급 액 : 12,292,310,700원(1차8,506,700,000원)

라. 계 약 일 : 2017. 08. 24.

마. 착 공 일 : 2017. 09. 01.

바. 준공기한 : 2019. 12. 15.

2. 상기 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 현황

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차(2회)	`17.09.01. ~ `19.12.15.	`17.09.01. ~ `19.12.20.	증)5일
1차분(2회)	`17.09.01. ~ `19.02.14.	`17.09.01. ~ `19.04.01.	증)46일

나. 귀책사유 : 도시기반시설본부

다. 지체상금 : 미부과

라. 준공기한 연기사유

○ 본 공사 현장여건 변경에 따른 공법변경 검토 및 폭염경보에 따른 공사 중지로 인한 준공기한을 연기하고자 함.

2 0 18. 09.

작성자 : 지방시설주사보    송영배 (인)

확인자 : 방재시설부장      이임섭 (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하