준공기한 연기 의뢰서

1. 용역 현황

가. 용 역 명 : 제2자유로 종점부(난지도길)입체화 실시설계 건설사업(설계감리)용역

나. 위    치 : 서울특별시 마포구 상암동(월드컵로)

다. 용역개요

- 구룡사거리 : 구룡교 확장 폭6m, 연장300m

- 월드컵파크3단지 및 디지털미디어입구 교차로 : 신호연동화

- 월드컵경기장 교차로 : 지하차도 신설 폭4차로, 연장540m

라. 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트  대표 박광하

마. 용역현황

구 분	용 역 비	계약년원일	착수년월일	준공기한	비고
전 체	122,599,000원	2017.5.23.	2017.5.24.	2018.1.18.

2. 상기 용역의 준공기한을 아래와 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기현황

구 분	당 초	변 경	비 고
전 체	2018.1.18.	2018.5.31.

나. 연기에 따른 귀책소재 : 계약자 귀책사유 없음

다. 지체상금부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

- 설계 감리중인 “제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계 용역” 의 과업기간 연장에 따른 건설사업(설계감리)용역기간 연장

2018. 1.    .

확인자 : 토 목 부 장     김영수

작성자 : 지방시설주사    윤창렬

도시기반시설본부 분임 재무관 귀하