준공기한 연기 의뢰서

1. 계약현황

○ 용 역 명 : 필동배수분구 침수방지사업 전면책임감리용역

○ 용역기간 : 2013. 4. 1. ~ 2017. 3. 31.

○ 용역금액 : 금1,383,060,000원

○ 계약업체 : ㈜삼안 외 1 대표 최동식

2. 위 건의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공 기한

구분	당 초	변 경	비고
기 간	2013. 4. 1. ~ 2017. 3. 31.	2013. 4. 1. ~ 2018. 12. 31.	(증)10.77개월

나. 연기사유 귀책소재 : 중구청

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기 사유

- 『필동배수분구 하수관로 종합정비사업』 사업기간이 2018. 12. 31.까지 연장계획에 따라 감리 용역기간을 공사일정에 맞춰 연기

2016년  12월   일

안전치수과장    신  대  식  (인)

중구(분임) 재무관 귀하