준공(납품)기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 양묘장 및 길동생태공원 급수관 설치공사

나. 계약업체 : 신화총업㈜ 대표 정종복

다. 도  급  액 : 금58,675,790원(금오천팔백육십칠만오천칠백구십원)

라. 계약년월일 : 2014. 06. 13

마. 착공년월일 : 2014. 06. 19

바. 준공기한 : 2014. 08. 17

2. 위 공사의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2014. 10. 15

나. 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소 조경지원과

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 덕은양묘장 비닐하우스내 국화 및 3기 꽃묘로 인해 급수관 설치작업이 어려운 바,

국화 등 꽃묘 분양후 작업이 가능하므로 준공기한 연기

2014년 8월

조경지원과장   김 제 중 (인)

동부공원녹지사업소 분임경리관 귀하