준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 서울창포원 공원환경개선 사업

나. 도 급 액 : 392,732천원

다. 공사기간 : 2014. 5. 16.~ 8. 23.

라. 도 급 자 : 태원종합공사 대표 김 진 국

마. 공사내용

○ 토공사: 토양개량 등 2종

○ 식재공사: 붓꽃 등 28종

○ 시설물 공 : 배수로,집수정 등 7종

○ 포장공사  : 흙포장 6종

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2014. 10. 10.

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

○ 공사 공종 중 포장,식재 등 일부 공종의 변경사항 발생에 따른 추가 공사 기간이 소요로 공사기간을 연장하여 사업 추진에 만전을 기하고자 준공 기한을 연기

2014. 08.

확인자 : 녹지관리과장  김 윤 철  (인)

서울특별시중부공원녹지사업소 분임경리관 귀하