준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 용  역  명: 옥수동 이동편의시설 설치 기본 및 실시설계용역

나. 용  역  비: 금111,191,000원

다. 도  급  자: ㈜서우티이씨 외 3개사

라. 계약년월일: 2021. 3. 2.

마. 착공년월일: 2021. 3. 3.

바. 준공기한: 2021. 10. 18.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 : 2021. 11. 30.

나. 연기 귀책소재 : 성동구청

다. 지체상금부과 대상 여부 : 미부과

라. 연기사유

- 디자인심의 관련 자료 보완 및 보강토옹벽 구조검토를 위한 추가 기간 소요

2021.  10.

토목과장    이 호 진   (인)

성동구(분임)재무관  귀 하