준공(납품)기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 천호공원 및 길동생태공원 시설물 정비공사

나. 계약업체 : 성보종합조경(주) 대표 정구헌

다. 도  급  액 : 금96,052,000원(금구천육백오만이천원)

라. 계약년월일 : 2014. 07. 22

마. 착공년월일 : 2014. 07. 28

바. 준공기한 : 2014. 09. 25

2. 위 공사의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2014. 10. 5

나. 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소 조경지원과

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 수목 제거 및 대나무울타리 물량증가 및 족구장 마사토포장 등 추가 공종 발생에 따라 절대공기 부족으로 준공기한 연기

2014년 9월

조경지원과장   김 제 중 (인)

동부공원녹지사업소 분임경리관 귀하