준공기한 연기의뢰서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 한양도성 순성길(남산, 낙산) 조성공사

나. 도 급 액 : 금492,085천원

다. 공사기간 : 2013. 12. 26 ~ 2014. 09. 30.

라. 도 급 자 : (주)그룹이십일 대표 이용훈

마. 공사내용

○ 철거 및 제거공사 : 가림막 등 21종 철거, 단풍나무 등 28종 390주 제거

○ 식재공사 : 할미꽃 등  7종 77,120주(본)

○ 시설물공사 : 데크계단 등 7종

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2014. 11. 30.

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

○ 공사 대상지내 체육시설물 이설 및 가설 건물 철거 건에 대해 민원인(남산체육회회장, 대책위원장)과 면담을 거쳐 이설 등에 합의, 시행하여 왔으나 2014. 09.07. 체육회 이설 지역에 추가로 시설물을 설치하여 달라는 민원을 제기하여 여러 차례 면담하였으나 체육시설물 이설 및 가설 건물 철거에 협조하지 않아 공사 진행이 지연되었으며, 2014.09.19.남산체육회 측과 면담 결과 체육시설 이설 및 가설건물 철거 등에 협조하기로 하여 공사 진행 하였으나 후속 공정 시행에 소요되는 공사 기간이 절대 부족함에 따라 준공 기한을 연기하고자 함.

2014. 09.

확인자 : 녹지관리과장  김윤철  (인)

서울특별시중부공원녹지사업소 분임경리관 귀하