준공(납품)기한 연기의뢰서

1. 계약내용

○ 위    치 : 갈매, 송릉 양묘장

공사(용역)명	기 간	도급금액(원)	도급업체
2015 양묘장 석면철거 및 폐기물처리용역	‘15.07.08 ~ 08.01	14,819,380	㈜원탑산업개발 대표 김광부
2015 양묘장 기반시설 정비공사	‘15.07.10 ~ 08.07	45,763,000	㈜유한화건 대표 김회인
2015 양묘장 기반시설 정비 전기공사	‘15.07.14 ~ 08.12	13,724,400	광원전설(주) 대표 김영선

2. 위 공사(용역)의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한

공사(용역)명	당초기간	변경기간	비고
2015 양묘장 석면철거 및 폐기물처리용역	‘15.07.08 ~ 08.01	‘15.07.08 ~ 08.17	15일연장
2015 양묘장 기반시설 정비공사	‘15.07.10 ~ 08.07	‘15.07.10 ~ 08.21	〃
2015 양묘장 기반시설 정비 전기공사	‘15.07.14 ~ 08.12	‘15.07.14 ~ 08.26	〃

나. 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소 조경지원과

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 공사 특성상 석면 철거 후 곧바로 지붕설치가 이루어져야하는데 착공 이후 장마가 계속되어 절대공기가 부족하여 준공기한 연기

2015. 7.

조경지원과장   김 제 중 (인)

동부푸른도시사업소 분임경리관 귀하