준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

○ 사 업 명 : 2015 시민의숲 숲가꾸기 사업

○ 위    치 : 서초구 매헌로 99 시민의 숲 (양재2동 236-1외 1필지)

○ 사업기간 : 2015. 7. 22 ~ 8. 18

○ 도급업체 : 서울시산림조합 김덕현

○ 도급금액 : 14,796,000원

○ 사업내용 : 시민의 숲 위험수목 제거, 대형수목전정, 가지치기 등

2. 위 공사(용역)의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한

- 당초 : 2015. 7. 22 ~ 2015. 8. 18

- 변경 : 2015. 7. 22 ~ 2015. 9.  4 (17일 연장)

나. 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소 조경지원과

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 공사착공 후 폭염 특보 등 무더위가 지속되어 작업장 안전사고 등을 예방하기 위해 준공기한을 연기코자 함.

조경지원과장  김 제 중 (인)

동부푸른도시사업소 분임경리관 귀하