준공기한 연기 의뢰서

1. 용역개요

○ 용 역 명 : 한강준설(저수로, 취수장)정비공사 감독권한대행

건설사업관리용역

○ 용역기간 : 2017.03.16 ~ 2018.3.31

○ 계 약 자 : ㈜ 케이지엔지니어링종합건축사사무소 대표 천병희

○ 계약금액 : 262,245,000원

2.  위 용역의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
용역 준공기한	2017.03.16. ~ 2018.3.31.	2017.03.16. ~ 2018.04.10.

○ 귀책소재 : 한강사업본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유

금년 한파로 인한 한강(샛강) 결빙으로 여의샛강 하상정비 및 수상운반이 어려워 당초 예정 공정보다 15일정도 늦어져 공사 관리 감독을 위한 투입일수 변경에 따른 준공기한(10일)을 연기

2018. 3.

치수과장    신 용 철 (인)

서울특별시 한강사업본부 (분임) 재무관 귀하