준공기한 연기 의뢰서

1. 계 약 내 용

가. 공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

나. 계약업체 : 백상건설(주)외 2개사

다. 도 급 액 : 12,009,904,700원(1차8,872,000,000원)

라. 계 약 일 : 2017. 08. 24.

마. 착 공 일 : 2017. 09. 01.

바. 준공기한 : 2019. 10. 31.

2. 상기 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 현황

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차(1회)	`17.09.01. ~ `19.10.31.	`17.09.01. ~ `19.12.15.	증)45일
1차분(1회)	`17.09.01. ~ `18.12.31.	`17.09.01. ~ `19.02.14.	증)45일

나. 귀책사유 : 도시기반시설본부

다. 지체상금 : 미부과

라. 준공기한 연기사유

○ 본 공사 예산배정 지연으로 인한 공사 일시 중지는 절대공기 부족으로 준공기한을 연기하고자 함.

2 0 18. 06.

작성자 : 지방시설주사보    송영배 (인)

확인자 : 방재시설부장      이임섭 (인)

서울특별시(분임)재무관 귀하