준공기한 연기 의뢰서

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사 폐기물처리 용역

나. 용 역 사

- 운   반 : 서울환경 대표 양성희

- 처   리 : ㈜장형기업 대표 김봉숙

다. 계약금액 : 9,700,000원(금구백칠십만원)

라. 계 약 일 : 2018. 09. 04.

마. 준공기한 : 2018. 10. 06.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 준공기한

- 당 초 : 2018. 09. 07. ~ 2018. 10. 06.

- 변 경 : 2018. 09. 07. ~ 2018. 10. 31.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미 부과

라. 준공기한 연기사유

- 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사의 철거공사 지연으로 인하여

폐기물 처리 용역의 공사기간 연장 필요

2018.  09.    .

동부공원녹지사업소 시설과장   진  병  규 (인)

서울특별시 동부공원녹지사업소 경리관 귀하