준공기한 연기 의뢰서

1. 공 사 개 요

가. 용 역 명 : 2018년 관내2구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

나. 도 급 자 : 주식회사 승리씨앤지 대표 이건영

다. 계약금액 : 1,326,430,000원

라. 용역기간 : 2018.03.26. ~ 2018.12.31.

마. 준공기한 변경 내역

- 당   초 : 2018. 3. 26. ~ 2018. 12. 31.

- 변경 후 : 2018. 3. 26. ~ 2019. 02. 28. (증 59일)

2. 위 용역의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 준공기한 연기일 : 2019.02.28.

나. 준공연기 귀책소재 : 성북구청

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 본 공사는 하수시설물에 대한 긴급한 복구 및 민원처리를 위한 공사로서 예상치 못한 긴급정비 사항에 대응코자 준공기한 연기가 불가피한 실정임

2018. 12.   .

치수과장   송 기 민 (인)

성북구(분임) 재무관 귀하