준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

가. 공  사  명: 장안평일대 가로환경개선공사 건설폐기물 운반 및 처리용역

나. 용  역  비: 금71,702,000원

다. 도  급  자: ㈜호연이디아이, (주)두성기업

라. 계약년월일: 2021. 3. 11.

마. 착공년월일: 2021. 3. 15.

바. 준공기한: 2021. 11. 4.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 : 2021. 12. 30.

나. 연기 귀책소재 : 성동구청

다. 지체상금부과 대상 여부 : 미부과

라. 연기사유

- ‘장안평일대 가로환경개선공사’ 가 추가 공사시행으로 인해 준공기한이 연장됨에 따라 폐기물 용역 준공기한 연장

2021.  10.

토목과장    이 호 진   (인)

성동구(분임)재무관  귀 하